투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 도로부속시설물 유지보수공사 설계변경(1회) 시행

우리 사업소에서 시행 중인 『2014년 도로부속시설물 유지보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 도로부속물 유지보수공사

나. 공사기간 : 2014.03.14.∼ 2015.02.28.

다. 도 급 자 : ㈜하현테크 대표자 임하태

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증 ․ 감	비 고
총공사비		395,155,130	395,155,130	-
도급비	공급가액	321,050,119	321,050,119	-
	부가가치세	32,105,011	32,105,011	-
	계	353,155,130	353,155,130	-
관급비		39,760,000	39,760,000	-
이설비		2,240,000	2,240,000	-

마. 설계변경 사유

- 현장 여건에 따라 신규공종 발생으로 도급비 변경없이 단순 시공물량 변경

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 보고서 1부. 끝.

주무관	김영용		도로보수과장	06/26 이규철
협조자	주무관	홍용현		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-5844	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8351	/전송	300-8364	/	2009024248@seoul.go.kr	/	대시민공개