시 행	설비부-6865
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	건축설비과장	설비부장
	정광식	조예환	06/26 박기형

설계변경 자문회의(소위원회) 심의결과(제5차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-6607호				요청부서		시책사업과		심의일자		2014.06.24
공 사 명			서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사(기계)
공 사 개 요			공사규모				지하차도 L=1,075m [BOX950m(방음터널210m포함) U-TYPE125m]
			공사기간				2008.3.10.~2014.6.30.(7차: 2013.10.8.~2014.6.30.)
			감 리 사				㈜동일기술공사 외 1개사
			설 계 사				(주)동일기술공사
			시 공 사				현대아산(주), 중앙건설(주)
심의요청사유							∘ 3,000만원 이상 설계변경(감액)
<설계변경 사유> ○ 운영부서 요구사항 반영 - 지하차도 전기실내 수전 및 샤워부스 설치 - 제어실 항온항습기 설치 - 원격감시제어 설비 2개소(강서사업소, 화곡터널) 추가 설치 ○ 양천소방서 지적사항 반영 - 소화약제 용량 증설 및 F.V.D. 설치
원설계자 의견
심의결과		조건부			붙임 심의위원 지적사항 보완 조건
심의결과 조치					· 심의위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영 조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			이달영				간 사		정광식
	위 원			이종근				위 원		이상협
	위 원			추한영				위 원		김정선