문서번호	도로시설과-11207
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널복개팀장	도로시설과장
김은진		代성기선	06/26 이용심
협 조
	주무관			성기선
	주무관			류경엽
	★주무관			이동섭

공무원직접수행 학술용역 착수보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

	도 시 안 전 실
	도로시설과

공무원 직접수행 학술용역 착수보고

연구개요

❍ 추진근거

- 조직담당관-5486(’14.5.08):2014년 공무원직접수행 학술용역 운영계획

- 조직담당관-6732(’14.6.09):2014년 공무원직접수행 학술용역 선정 심의회 결과 알림

❍ 연구개요

- 연구명 : 도로시설물 정량적 세척방안 수립연구

- 기  간 : ’14. 6.11 ~ 10.31

- 연구비 : 3,070천원

- 연구TF : 도시안전실 도로시설과 연구 TF (팀장 : 정달근)

- 연구방향

□ 도로시설물 세척관련 문헌조사 및 자료분석

□ 도로시설물 세척장비 종류 및 운영실태 조사

□ 시설물별 세척주기 및 세척시행 시설물 현황분석

□ 정량적 세척평가 방법을 위한 점검항목 및 기준수립

□ 과학적 측정을 통한 세척평가 방안조사

□ 도로시설물의 합리적인 세척을 위한 매뉴얼 작성

❍ 연구배경 및 목적

- 정성적으로 운영되던 기존 도로시설물 세척운영을 과학적이고 정량적인 운영으로 인식재고

- 세척 후 세척상태 육안검사로 합리적인 평가 및 점검기준 미흡

- 도로시설물 세척기준 매뉴얼을 작성하여 세척장비 및 세축주기 등의 적절성 검토 및 개선필요

추진계획

❍ 연구수행 인력 및 업무분장

구 분	연 구 내 용	연구수행 세부임무
팀 장 정달근	연구총괄	1. 연구과제의 원활한 수행을 위한 업무총괄 2. 관련분야 외부자문위원 섭외 및 자문요청 3. 연구방향 제시
팀 원 김은진	현황 및 문제점 조사 국내외 사례조사	1. 현황 및 세척실태 조사 2. 국내외 문헌조사 3. 세척장비 조사 및 세척결과분석
팀 원 성기선	설계기준 검토 개선방안 제시	1. 시설물별 세척방법 검토 2. 세척관련 신기술 검토
팀 원 류경엽	활용방안 검토 및 보완	1. 개선방안의 현장 활용성 및 적용성 검토 및 보완 2. 세척주기 정량적 분석방법 검토
팀 원 이동섭	실무적용	1. 세척관련 구조물 시험 및 결과정리 2. 사업소 시설물 섭외 등

❍ 연구방법

- 세척관련 문헌조사 및 현황분석

□ 도로 시설물의 세척 현황조사

□ 해외 및 유관기관(한국도로공사 등) 유지관리 기준자료 수집

- 세척시행 시설물별 장비조사

□ 도로시설물 세척장비 및 세척사례조사

· 터널, 지하차도 등 시설물관련 자료수집

□ 도로부속 시설물 세척장비 및 사례조사

· 충격흡수시설, 중앙분리대, 방호울타리 등 세척관련 자료수집

□ 교통안전 시설물 세척장비 및 사례조사

· 도로표지, 신호기기, 시선유도봉 등 세척관련 자료수집

- 개선방안 제시 및 검토

□ 세척 후 점검항목 및 평가방법 정립

· 시설물 및 교통안전 시설 등 세척 후 관리기준 수립

□ 과학적 측정을 통한 세척주기의 정량적 분석기준 검토

- 연구결과의 활용방안 및 기대효과 분석

□ 활용방안 모색

· 도로사업소에 횡단 전개하여 시설물 세척을 통한 유지관리 업무에 활용

· 제안된 정량적 평가방법을 통해 적절한 세척주기 결정

· 대기오염 및 미세먼지 영향 분석 자료로 활용

□ 기대효과

· 깨끗하고 쾌적한 도로환경 조성 및 시민건강 증진에 기여

❍ 추진일정

일정 추진내용	5월		6월			7월				8월		9월			10월
연구과제 1차 토론 (연구방법, 조사내용)
현황 및 문제점 조사
국내외 사례조사
세척 장비조사 과학적 세척검토 방안검토
중간보고 및 자문회의
정량적 세척방안 매뉴얼 내용작성
작성 세척 매뉴얼 검토 정량적 측정자료 검토 및 분석
최종보고회 및 자문회의
정량적 세척 매뉴얼 보완 및 과학적 운영방안 제시
보고서 작성

행정사항

❍ 연구비 재배정  : 3,780,000원

- 계약체결시 70%(2,646,000원) / 과제완료시 30%(1,134,000)

※ 예산과목 : 시정의 효율성제고, 시정연구기능강화, 학술용역 공무원 직접수행과제, 기간제근로자등보수(101-04), 사무관리비(201-01), 국내여비

❍ 집행계획

- 조직담당관에서 연구부서 일상경비로 예산 재배정

- 매식비, 출장여비, 자문위원수당, 인쇄비 등 연구비 범위내에서 추진일정에 따라 지출

붙  임   1. 공무원직접수행 연구계획서 1부.

2. 공무원직접수행 착수보고서 1부.  끝.