함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계 변경 심의위원회 개최(2013년 노원구 관내 상수도공사-2차)

1. 우리 사업소에서 시행중에 있는 “2013년 노원구 관내 급수공사(단가계약)-2차”에 대하여 신규공종 및 물량 증˙감 발생으로 인한 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 일반현황

○ 공 사 명 : 2013년 노원구 관내 급수공사(단가계약)-2차

○ 공사개요   ․ 당초 : D = 13~300mm, L = 1,678m

․ 변경 : D = 13~300mm, L = 977m

○ 계약기간 : 2014. 1. 8 ~ 2014. 6. 30

○ 도 급 비 : 증감없음

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증,감
총 부기금액 (도 급 비)	399,403,690	361,273,000	-38,130,690

○ 시 공 사 : (주)백두이엔지  대표 김재기

나. 심의회 개최

○ 심의 일정  : 2014. 6. 26(목)  16:30

○ 심의 장소  : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의 위원  : 시설7급 문병희, 시설7급 강대유, 시설7급 유광창, 시설7급 이한수

다. 심의내용

○ 설계변경의 타당성               ○ 제경비 적정산정 및 적정적용

○ 부대공 및 신규공종 적정산정     ○ 기타 제반규정 적정 준수여부 등.

첨 부 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의 요청 및 사유서 각 1부.  끝.

주무관	김종필토		주무관	이승완		급수운영과장	06/26 김수영
협조자
시행	급수운영과-12458	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	대시민공개