투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	성지씨엔지(주) 대표 김종태 귀하
(경유)
제목	작업지시 기간 연장 알림(2014년 도로굴착복구공사(연간단가)-서부)

1. 귀 사의 번창을 기원하며 우리사업소 도급공사 시행에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

2. 「2014년 도로굴착복구공사(연간단가)-서부」와 관련하여 기 작업지시한

9차 및 11차 내역중 작업지시 기한내 공사 완료가 어려울 것으로 판단되어 부득이 작업지시 기한을 연장 사하오니 기한내 작업을 완료하고 공종별 작업사진을 첨부하여 완료

보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 작업기한 : ┏ 당 초 : 6. 30

┗ 변 경 : 7. 31

나. 작업지시 기간 변경 내역

연번	지시번호	노선명	지시내역	기간연장 사유	작업지시 기간(당초)	비고
1	9-1	을지로	· 포장복구 : 1.2*30m · 차로단위 : 3.5*30m · 원인자 :한전 서울본부	굴착공사 구간내 손궤된 상수도시설물 정비공사 지연	‘14.5.9 ~ 6.30
2	13-1	통일로	· 포장복구 : 1.2*926m · 차로단위 : 3.3*926m · 원인자:sk 브로드밴드	강우 및 지하매설물로 인한 공사지연	‘14.6.10 ~ 6.30
3	13-3	서소문로	· 포장복구 : 1.2*141m · 차로단위 : 3.5*141m · 원인자:sk 브로드밴드	해당 노선과 병행되는 신규굴착공사 지연	‘14.6.10 ~ 6.30

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	최정필		도로보수과장	06/26 이규철
협조자	주무관	김영용
시행	도로보수과-5850	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/	jp2575@seoul.go.kr	/	대시민공개