투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(잠원2 빗물펌프장 신설공사 건설폐기물처리용역)

우리 본부에서 시행 중인  「잠원2 빗물펌프장 신설공사 건설폐기물처리용역」에 대하여【준공기한 연기】를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 「잠원2 빗물펌프장 신설공사 건설폐기물처리용역」

나. 계약금액 : 총차 금322,968천원(1차 : 250,000천원)

다. 계약상대자 : 도성개발(주) 대표 박진영

라. 준공기한 연기

구분	준공기한		비고
	당 초	변 경
총 차	‘13.03.11~’14.07.02	‘13.03.11~’15.12.31	증)547일
1 차	‘13.03.11~’13.07.02	‘13.03.11~’15.02.28	증)241일

마. 연기사유 : 본 폐기물처리용역은 잠원2빗물펌프장 신설공사의 폐기물을                               처리하는 용역으로 본 공사의 준공기한 연기에 따른 순연

바. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임   1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이병환		방재시설과장	서관석		방재시설부장	06/26 代서관석
협조자
시행	방재시설부-5181	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개