다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 변경계약 의뢰

1. 우리과에서 시행중인 「탄천 등 8개하천 기본계획 및 하천시설물 관리대장 작성 용역」에 대하여 용역 준공기한 변경을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 탄천 등 8개하천 기본계획 및 하천시설물 관리대장 작성 용역

○ 용 역 비 : 1,279,492천원

○ 계약업체 : ㈜이산 외 2개사

○ 과업내용 : 하천기본계획 수립 및 하천시설물 관리대장 작성

나. 변경내용

○ 준공기한 연기내용

구 분	용 역 기 한	계약금액(천원)	비 고
당 초	2012.5.3 ~ 2014.06.30	1,279,492	용 역 비 변동없음
변 경	2012.5.3 ~ 2015.02.20

○ 연기사유

- 본 과업에 포함된 반포천, 사당천에 대한 배수개선안 확정 후 하천기본계획에 반영 및 전략환경영향평가 협의 등 잔여과업 수행을 위해 준공기한 연기

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 용역 추진현황 검토보고 방침서 1부.

3. 변경 합의각서 1부. 끝.

	하천관리과장
주무관	권혁정		하천관리팀장	김준형		하천관리과장	06/26 한유석
협조자
시행	하천관리과-10351	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3888	/전송	2133-1044	/	seoulroad@seoul.go.kr	/	대시민공개