문서번호	교량보수과-3993
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량보수과장	서부도로사업소장
백운경	代정상모	06/26 김만수

『홍제천고가교 정밀안전진단용역』

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

교량보수과

홍제천고가교 정밀안전진단용역 준공기한 연기 검토 보고

『홍제천고가교 정밀안전진단 용역』을 수행중인 한국시설안전공단으로부터 용역 준공기한을 연기 요청한 건에 대한 검토 보고임.

※ ‘14.5.23 중간보고시 기보고 사항

Ⅰ		용역 현 황

용 역 명 : 홍제천고가교 정밀안전진단용역

용역기간 : 2013. 8. 01 ~ 2014. 7. 26

용역개요 : - 본선 : 연장 6,978m, 폭 26m

- 램프 : 연장 6,635m, 폭 6~9m

도 급 비 : 953,510,000원

Ⅱ		보 고 내 용

○ 준공기한 연기

- 당초 : 2013. 08. 01 ~ 2014. 07. 26

- 변경 : 2013. 08. 01 ~ 2014. 10. 26 (증 90일)

○ 공기연장사유

연장사유		계획 일수	실작업 일수	연장 일수	비 고
1.수변공원내 고소차 활용불가구간과 교면포장 및 방음벽조사 시 내부 순환로의 빈번한 교통통제로 인해 작업 진행 속도 지연		100	140	40	교통통제 소요시간 30분, 교통통제 해제시간 30분, 교통정체 시 작업철수로 인하여 일작업시간(6시간) 에서 40%정도 감소
2.방음벽(3.5m)+감쇄기(0.5m) 설치구간 작업 시 감쇄기 해체 및 설치여건 악화에 따른 작업진행속도 지연		60	80	20	일작업시간(6시간) 중에서 감쇄기 해체 및 설치시간으로 인해서(해체소요시간 1시간, 설치소요시간 1시간)일 작업시간 30%정도 감소
3.과업지지서 특별내용	강우시 STB거더 현장연결부 누수조사	4	13	30	2013.10∼2014.5월까지 서울시 10mm이상 강우일수가 10일 정도로 30일 더 필요
	본선구간배수시설 집수구 상태	3	15
	도로교면 체수현황 조사	3	12
	합계	10	40
총합계				90

Ⅲ		조 치 계 획

○ 상기 한국시설안전공단의 용역 준공기한 연장 보고내용과 같이 2014. 10. 26까지 연기하여 용역 추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1) 관련공문(한국시설안전공단) 1부. 끝.