문서번호	시설과-2257
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	홍순철	변규열	06/27 이춘희
협 조

「서울고등법원 등 2개소 옥상녹화·텃밭 조성공사 실시설계용역」

준공기한 연기 검토보고

2014.  6.

동부공원녹지사업소

(시설과)

「서울고등법원 등 2개소 옥상녹화·텃밭 조성공사 실시설계용역」

준공기한 연기 검토보고

「서울고등법원 등 2개소 옥상녹화·텃밭 조성공사 실시설계용역」과 관련하여 용역사로부터 준공기한 연기 요청이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림

용역개요

❍ 용 역 명 : 서울고등법원 등 2개소 옥상녹화·텃밭 조성공사 실시설계용역

❍ 용역기간 : 2014. 05. 16 ~ 2014. 06. 29

❍ 계약금액 : 금 20,220,000원

❍ 도 급 자 : 채움조경기술사사무소 대표 김병채

준공기한 연기검토

❍ 검토사유 : 준공기한 연기

❍ 연기사유

- 설계에 반영된 녹화기반재 신기술 적용 적정성 검토 및 절차이행, 참여기관 협의 이행 등으로 인한 추가 소요기간 필요

※신기술 심의(자문)절차 (20~25일 소요)

· 신기술 적용가능 자체검토 및 심의(자문)요청(발주청)→위원선임 및 심의(자문)    자료 배부(기술심사담당관)→기술검토 및 의견서제출(심의위원)→검토의견서 통보    (기술심사담당관)→검토의견서 제출(발주청)→심의위원회 개최(기술심사담당관)→    심의의결(자문)결과 통보(기술심사담당관)

❍ 준공기한 변경

- 당 초 : 2014. 05. 16. ~ 2014. 06. 29

- 변 경 : 2014. 05. 16. ~ 2014. 07. 30 (31일 연장)

❍ 지체상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

조치계획

❍ 용역사의 준공기한 연기 신청내용이 타당하다고 판단되므로 계약부서에 변경계약(준공기한 연장계약) 요청하고자 함

붙임 : 준공기한 연기 신청 공문 1부.  끝.