문서번호	시설관리과-13625
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
박학중	최양주	이자원		06/27 이상래
협 조

’13년 건설폐기물 운반 및 처리 용역 설계변경계획

(강서수도사업소 관내 급수공사, 긴급누수복구)

2014.  6.

강서수도사업소

’13년 건설폐기물 운반 및 처리 용역 설계변경계획

(강서수도사업소 관내 급수공사, 긴급누수복구)

2013년도 우리사업소 연간단가(급수공사, 긴급누수복구공사)에서 발생되는 건설폐기물 운반 및 처리 용역에 대한 물량 증 ․ 감과 계약금액 변동(최종)에 따른 설계변경을 시행코자 함.

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 2013년 강서수도사업소관내 급수공사, 누수복구공사발생 건설폐기물 처리용역

나. 용역개요

구 분	건설폐기물 운반(㎥)	건설폐기물 처리(ton)
계	2,940	4,448
폐아스콘	872	-(무대)
폐콘크리트	1,553	3,572
폐토사	515	876

다. 계 약 일 : 2013. 7. 8

라. 착 공 일 : 2013. 7. 9

마. 준공기한 : 2014. 6.30

바. 계약금액 : 금128,040,000원

사. 계약업체 : (주)참마루이엔티 대표 정달옥

아. 감독부서 : 강서수도사업소(시설관리과)

2. 예산과목

가. 급수공사 : 급수공사비, (급수공사), 급수공사비(신설공사비)

나. 급수공사 : 급수공사비, (급수공사), 급수공사비(개조공사비)

다. 누수복구 : 배급수비, (상수도관 누수복구), 수선교체비(기타교체비)

3. 설계변경

가. 사   유

- 건설폐기물 운반 및 처리 물량 변동(증․감)

- 계약기간 만료에 따른 최종 변경

나. 물량 증감 내역

(단위, ㎥)

공 종		당 초	변 경	증․감
계		2,940	2,794	감) 146
폐아스콘	적치장,현장→처리장(30㎞) (DT 24톤)	872	761	감) 111
폐콘크리	적치장,현장→처리장(30㎞) (DT 24톤)	1,553	1,039	감) 514
폐토사	적치장,현장→처리장(30㎞) DT 24톤	515	994	증) 479

다. 설계변경 금액

(단위, 원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감
총 용 역 비	128,040,000	118,393,000	감) 9,467,000
공 급 가 액	116,400,000	107,630,000	감) 8,770,000
부 가 세	11,640,000	10,763,000	감) 877,000
계	128,040,000	118,393,000	감) 9,467,000

4. 행정사항

사업소 설계변경 심의위원회 개최결과에 따라 최종 설계변경 시행

붙  임  1. 설계변경 내역서 1부.  끝.