문서번호	시설관리과-13638
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김재엽	최양주	이자원		06/27 이상래
협 조

·

설계변경 심의위원회 개최 결과

(2013년 방화1동외 10개동 상수도공사-4회,최종)

2014. 6

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

설계변경(4회,최종) 심의위원회 개최결과

우리사업소에서 시행중인 『2013년 화곡본동외 8개동 상수도공사 (장기계속)』에 대한 설계변경(4회,최종) 심의위원회 개최 결과임.

□ 공사현황

○ 공 사 명 ： 2013년 방화1동 외 10개동 상수도공사(장기계속)

○ 공사개요 ： 당초 D = 13 ~ 300mm, L = 1,267m

변경 D = 13 ~ 300mm, L = 1,146m

○ 공사기간 ： 2013. 06. 28 ~ 2014. 06. 30

○ 계약금액 ： 금474,817,000원

○ 시 공 자 ： 호용종합건설(주) 대표 김익관

□ 설계변경 심의사항

○ 심의일시 : 2014. 06. 27(금) 10:00

○ 도 급 액

- 당 초 : 금474,817,000원

- 변 경 : 금473,682,000원 (감1,135,000원)

○ 심의 주요내용

- 설계변경의 타당성, 제경비산정 적정여부

- 공종별 증․감량의 적정성, 신규공종 단가적용 적정성 여부

□ 설계변경 심의결과

○ 계약변경 타당

○ 제경비산정 적용 타당

○ 공종별 증․감량 적용 타당

○ 공종별 단가 적용 타당

□ 조치계획

○ 설계변경 시행 후 본청 재무과에 변경계약 의뢰

따로붙임 : 1. 설계변경 계획서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최 결과 1부.  끝.