문서번호	급수운영과-15253
결재일자	2014.6.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박종대		김광운	06/27 代김태형
협조

설계변경 심의 결과보고

<2013년 마장동외7개동 상수도공사(장기계속단가계약)>

2014. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

설계변경(3차, 최종) 심의 결과 보고

□ 설계변경 개요

가. 공 사 명 : 2013년 마장동외7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사기간 : 2013.04.10 ~ 2014.06.30

다. 설계변경 금액 내역

단위 : 원

구 분	당초	변경	비 고
도 급 액	546,302,700	351,383,800	감 194,918,900
공급가액	496,638,819	319,439,818	감177,199,001
부 가 세	49,663,881	31,943,982	감17.719.899

□ 심의내용

가. 일    시 : 2014. 6. 27(금)

나. 심 의 자 : 급수운영과장외 5인

다. 심의내용

∘주요 공종별 신공종 및 물량 증∙감에 따른 설계변경의 타당성 검토

□ 심의결과

가. 주요 공종별 신공종 및 물량 변경사항 타당

□ 조치의견

∘ 심사결과 설계변경이 타당하므로 본청 재무과에 계약의뢰코자함.

첨부 : 1. 설계변경 심의의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.