투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로점용(굴착,복구)허가 기간 연장 요청

우리시에서 시행중인 『서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사』의 준공기한이 변경됨에 따라 아래와 같이 도로점용(굴착,복구)허가 기간을 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-   아     래   -

위 치	사업개요	기 간		비 고
		당 초	변 경
양천구 신정동 631 ~ 857-3	도로구조개선L=1.35km 지하차도(4차로) L=1.075m	2008.9.19 ~ 2014.6.30	2008.9.19 ~ 2014.8.29	남부순환로
구로구 개봉동 101 ~ 416-2		2008.8 ~ 2014.6.30	2008.8 ~ 2014.8.29	남부순환로

붙임 : 신청서 2부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	양천구청장(도로과장),구로구청장(도로과장)
주무관	박천용		광역도로과장	최광무		토목부장	06/27 노우성
협조자
시행	토목부-12404	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	park8370@seoul.go.kr	/	대시민공개