투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	중부지방고용노동청안양지청장(산재예방지도과장)
(경유)
제목	사업장 안전보건개선계획 개선기한 연기 요청

1. 중부지방고용노동청 안양지청 산재예방지도과-2118호(2014.4.17)와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리 대공원 사업장 안전보건개선계획서 상의 개선기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 개선기한 연기요청 내역

연기요청 항목	공기 변경요청내역		변경요청 사유
	변경 전	변경 후
바. 기타부문 6. 기타항목 - 제2아프리카관 하마사 내실 천정 노후 부식 보수공사 등 13건	개선기한 6월	개선기한 9월	4 ～ 6월은 대공원의 성수기로 관람객의 안전을 고려하여 공사발주 및 착공 연기

붙임    사업장안전보건개선계획 연기요청 내역 1부. 끝.

	서울대공원장
주무관	최호철		주무관	백철		총무과장	06/27 代백철
협조자
시행	총무과-8950	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 막계동 서울대공원 159-1	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7212	/전송	02-500-7991	/	006just@seoul.go.kr	/	부분공개(6)