함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(5차)-최종

1. 우리사업소에서 시행하는 “2013년 강동수도사업소 관내 긴급누수 복구공사(장기계속 단가계약)”의 신공종 및 계약물량 증.감 발생으로 설계변경 계약금액조정 심사 결과에 따라 따로붙임과 같이 설계변경(5차-최종) 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-   아        래   -

가. 공 사 명 : 2013년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : 심성건설 대표 조석심

다. 공사기간 : 2014.1.1 ~ 2014.6.30(총부기기한 2013.4.11 ~ 2013.6.30)

라. 설계변경 및 차수별 금액내역(5차변경 - 최종)

구 분	당초 금액	변경 금액	증･감	비 고
총부기금액	1,239,491,000	1,258,547,000	증)19,056,000
1차수 금액	628,731,000	628,731,000	-	2013년분
2차수 금액	610,760,000	629,816,000	증)19,056,000	2014년분

마. 설계변경 및 차수별 금액변경 사유 : 신공종 및 계약물량 증.감 사항 등 발생

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(누수복구)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(불용관)

따로붙임 : 1. 계약금액 조정결과 통보서 1부.

2. 설계변경내역서(심사후). 1부.

3. 설계변경 내부 품의서 1부.

4. 변경 합의서 1부.  끝.

5. 제비율 검증 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	함인석		주무관	송종범		시설관리과장	전결 06/27 이계환
협조자
시행	시설관리과-9755	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51(성내동541-4)	/
전화	3146-5203	/전송	3146-5239	/	keironn99@naver.com	/	대시민공개