투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	시설공사(총차 및 7차,8차) 준공기한 연기 의뢰(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

2. 공사개요 : 지하차도 설치 B=4차로, L=736m

3. 도 급 자 : ㈜케이에스씨건설외 1사

4. 준공기한 연기의뢰 현황

구 분	도 급 비	착공년원일	당초준공기한	변경준공기한	비 고
총차	45,945,504,000원	‘07. 9.10.	‘14. 6.30	‘14.12.31.
7차	9,103,836,000원	‘13. 4.18	‘14. 6.29	‘14.10.31
8차	4,769,426,000원	‘13. 3.31	‘14. 6.30	‘14.12.31

5. 귀책소재 및 연기사유

가. 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

나. 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 연기사유 : 지중화사업 추진 및 시점부 개봉두산아파트 담장 옹벽시공 반대민원으로 옹벽공사 착공지연과 구로구 교통민원 발생 및 림괄아파트 방음벽 설치 요청 민원으로 인한 절대공기 부족에 따른 잔여공사 추진을 위한 절대공기 부족

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고 1부.

3. 관련서류 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	최광무		토목부장	06/27 노우성
협조자	경리과장	최영미
시행	토목부-12379	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개