문서번호	급수운영과-15288
결재일자	2014.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
강재성		代한호진	06/27 代김태형
협조

설계변경 보고서[2013년 성동구 관내 건설폐기물처리용역(장기계속)]-2차,최종

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

2013년 성동구 관내 건설폐기물처리용역(장기계속)

설계변경 보고서(2차,최종)

『2013년 성동구 관내 건설폐기물처리용역(장기계속)』시행 중 시공물량 증․감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(2차,최종)을 시행코자 합니다.

1				용역현황

○ 용 역 명 : 2013년 성동구 관내 건설폐기물처리용역(장기계속)

○ 용역개요 : 폐기물운반 – 784㎥, 폐기물처리 – 1,778ton

○ 용역기간 : 2013. 6. 10 ~ 2014. 6. 30.

○ 도 급 자 : ㈜문화기업  대표 김태흔

○ 도 급 비 : 34,929,000원

2				설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 시공물량 증･감 발생

- 시공물량 증･감 현황

․ 폐아스콘 및 폐콘크리트 운반,처리 물량 감소

3				공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감
용 역 비	34,929,000	24,178,000	감) 10,751,000
공급가액	31,753,637	21,980,000	감) 9,773,637
부가가치세	3,175,363	2,198,000	감) 977,363

4				보고자 의견

○ 위와 같은 실정으로 설계변경 사항이 발생하여 우리사업소 설계변경 심의위원회를 개최하여 타당성 여부 등을 검토하고 심의결과에 의거 설계변경을 시행코자 합니다.

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.