함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	관급자재(오존주입설비) 납품기한 연기 요청

1. 계약번호 12142006000(2014. 01. 22) 및 암사고도(기계) 14-313(2014. 6. 18)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련「암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사」관급자재인 오존 주입설비가 고도정수처리 시험운전 최종 단계에서 실시됨에 따라 시험운전 완료후 검수코자 납품기한을 아래와 같이 연기하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 오존주입설비 구매설치

나. 계약번호 : 12142006000(구매관리번화 12102167500)

다. 계 약 자 : 오조니아코리아(주).  대표 이재용

라. 변경내용

건명	납품기한		연기사유
	당초	변경
오존수 주입장치	2014.6.30	2014.10.30	오존설비 고도정수처리 시험운전 시기 미도래 계약금액은 변경없이 납품기한만 변경

마. 지체상환금 부과여부 : 귀책소재가 우리본부에 있으므로 미부과

붙임 : 1. 오존주입설비 납품기한 변경계획보고서 1부.

2. 오존설비 납품기한 변경공문 1부(동의서, 계약서).  끝.

	기전설비과장
주무관	유통희		기전설비과장	06/27 서대훈
협조자
시행	기전설비과-4298	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개