함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	'13년도 건설폐기물 처리용역 설계변경(최종) 시행

1. 우리사업소 2013년도 건설폐기물 처리용역에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2013년 강서수도사업소관내 급수공사, 누수복구공사발생 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 : 2013. 7. 9 ~ 2014. 6. 30

다. 계약업체 : ㈜참마루이엔티, 대표 정달옥

라. 설계변경 사유 : 물량증감 및 계약금액 변경

마. 예산과목

- 급수공사비, (급수공사), 급수공사비(신설공사비)

- 급수공사비, (급수공사), 급수공사비(개조공사비)

- 배급수비, (상수도관누수복구), 수선교체비(기타교체비)

바. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	총 부기금액	1차(2013년)	2차(2014년)-최종
당 초	128,040,000	54,087,000	73,953,000
변 경	118,393,000	54,087,000	64,306000
증 감	감) 9,647,000	-	감) 9,647,000

붙  임  1. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 설계변경 심의결과서 1부.  끝.

주무관	박학중		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	이자원		강서수도사업소장	06/27 이상래
협조자	행정관리팀장	김경식
시행	시설관리과-13669	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02)3146-4005	/전송	3146-4039	/	harkjung10@hanmail.net	/	대시민공개