함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2013년 방화1동외 10개동 상수도공사-4회,최종)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2013년 방화1동외 10개동 상수도공사(장기계속 단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(4회,최종)을 시행하고 계약의뢰하오니 조치하여   주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2013년 방화1동외 10개동 상수도공사(장기계속 단가계약)

나. 공사기간 : 2013. 06. 28 ~ 2014. 06. 30

다. 도 급 자 : 호용종합건설(주) 대표 김익관

라. 설계변경 사유 : 계약물량 증․감 및 신공종발생

마. 예산과목 : 급수공사비, (급수공사), 급수공사비(신설공사비)

급수공사비, (급수공사), 급수공사비(개조공사비)

구축물,(세척갱생관 정비), 시설비등(시설비)

구축물,(무라이닝관 정비), 시설비등(시설비)

배급수비,(수도계량기보호통 보온재 교체), 수선유지교체비(기타교체비)

배급수비,(교체장애수전 정비),수선교체비(수도관교체비)

바. 설계변경 내역 및 차수별금액

(단위 : 원)

구분	총 부기금액		1차수 계약		2차수 계약		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
총공사비	755,987,000	754,852,000	206,326,000	206,326,000	549,661,000	548,526,000	감)1,135,000
도 급 비	474,817,000	473,682,000	148,676,000	148,676,000	326,141,000	325,006,000	감)1,135,000
관 급 비	131,170,000	131,170,000	17,150,000	17,150,000	114,020,000	114,020,000
도로복구비및기타	150,000,000	150,000,000	40,500,000	40,500,000	109,500,000	109,500,000

따로붙임   1. 설계변경 시행문 및 보고서 1부.

2. 설계변경 심의결과서 1부.

3. 설계변경 내역서 및 합의서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김재엽		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	전결 06/27 이자원
협조자
시행	시설관리과-13661	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3995	/전송	3146-4039	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	대시민공개