문서번호	교량보수과-4033
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량보수과장	서부도로사업소장
정상모	代정상모	06/27 김만수

두모교 보수공사 추진현황 보고

2014. 6.

서부도로사업소

(교량보수과)

두모교 보수공사 추진현황 보고

정밀안전진단 결과 보수,보강이 필요한 사항이 있어 “두모교 보수공사”로 추가 집행이 필요한 바, 우리사업소에 기배정된 원인행위 미필액(낙찰차액)을 집행, 적기에 보수(보강)코자 하며 그에 따른 폐기물 처리계획을 보고 드림

□ 사업 개요

○ 공 사 명 : 두모교 보수공사

○ 공사기간 : 2014. 4. 29 ~ 2015. 3. 1

○ 공사개요 : 교면포장 및 방수 123.2 a, 콘크리트 단면보수  2,420 m2

○ 도 급 비 : 1,895백만원

○ 시 행 자 : 파워개발(주)

○ 감 독 자 : 시설관리공단(공사감독2처)

□ 사업비 집행내용

(단위 : 천원)

교량보수과 배정예산(A)		도급비 (B)	관급자재비(C) (아스콘)	원인행위미필액 A–(B＋C)	비 고
합 계	2,365,915	1,895,065		250,845	원인행위미필사유 ⇒ 낙찰차액
교면포장 개량비	1,556,915	1,095,065	211,005	250,845
보수보강비	800,000	800,000	-	-

□ 현황 및 문제점

○ 두모교 보수공사 발주, 계약 이후 정밀안전진단 실시 결과(한국시설안전공단)

P21 교각상부 인장균열 및 램프 A7 교각의 균열 보수가 필요함

○ P21 교각은 라멘교와 PSC 박스를 동시에 지지하고 있는 중요 구조물로서

외부전문가의 자문을 받아 적정한 보수공법 결정 및 보강 조치 필요

○ 사업구간 외에 포장 노후 열화 구간(일산방향 서빙고동 구간)은 내년 사업비를

요구, 시행하기까지는 상당 시일이 소요되며

○ 미조치 기간 동안 포장 패임으로 인한 차량파손, 안전사고 우려 및 교량상부

에 우수 침투로 구조물에 악영향이 우려되는 바 포장(방수) 보수 필요

□ 조치 계획

○ 기배정 공사비중 원인행위 미필액(낙찰차액) 집행 : 223백만원

- P21 교각 상부 : 보수공법 실시설계(자문) 결과 단면 확대로 시행

► 공사비 :  120백만원 (실시설계비 17백만원 포함)

- 램프 A7 교각 상부 균열 보수 : 2백만원

- 노후 열화된 교면포장 및 방수 : 일산방향 서빙고동 구간 (L=50m, 7.9a)

► 공사비 : 101백만원 (관급자재비 포함)

두모교 일산방향 P21 교각 상부 균열

램프 PA7 코핑부 균열 (폭 0.3㎜ 이상)	램프 PA5 코핑부 균열 (폭 0.3㎜ 미만)

두모교 일산방향 교면포장 노후, 열화 (서빙고동 구간)

□ 기대 효과

○ 교각상부 균열 및 포장노후, 열화구간에 대해 향후 예산확보 시행일까지 방치하지 않고 조속 보수, 보강하여 안전사고방지 및 시설물 안전 확보

□ 폐기물 처리 계획

○ 사고이월된 “2013 두모교 외 4개소 폐기물처리용역” 도급비 72백만원중

집행 잔액 58백만원으로 두모교 보수공사의 발생 폐기물 처리

※ 폐기물 처리용역 신규 미발주로 사업비 절감

○ 다만 폐기물 처리용역(흥진환경)의 준공기한이 2014. 8.31 이므로

두모교 포장보수가 완료되는 시점(2014.12.31)으로 과업기간 연장 필요

- 사업명 : 두모교 외 4개소 보수공사 폐기물처리용역

- 시행자 : 흥진환경(주)

- 용역비 : 197,726천원

- 준공기한 연기 : 당초 2014. 8.31 ⇒ 변경 2014. 12.31

□ 행정 사항

○ 공사감독자(시설관리공단)에게 설계변경 요청 및 변경계약

○ 폐기물 처리용역 준공기한 연장 요청 (시 재무과)

따로붙임 : 1) P21 및 램프A7 교각 현황 및 보수, 보강도면

2) 폐기물 처리용역 계약서.  끝.