문서번호	시설관리과-13658
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
박학중	최양주	이자원		06/27 이상래
협 조

설계변경(최종) 심의위원회 개최 결과보고

(’13년 강서수도사업소관내 급수공사, 누수복구공사발생 건설 폐기물처리 용역)

2014.  6.

강서수도사업소

설계변경(최종) 심의위원회 개최 결과보고

(’13년 강서수도사업소관내 급수공사, 누수복구공사발생 건설 폐기물처리 용역)

2013년도 우리사업소 연간단가(급수공사, 긴급누수복구공사)에서 발생되는 건설폐기물 운반 및 처리 용역에 대한 설계변경(최종) 심의 위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 2013년 강서수도사업소관내 급수공사, 누수복구공사발생 건설폐기물 처리용역

나. 용역개요

구 분	건설폐기물 운반(㎥)	건설폐기물 처리(ton)
계	2,940	4,448
폐아스콘	872	-(무대)
폐콘크리트	1,553	3,572
폐토사	515	876

다. 계 약 일 : 2013. 7. 8

라. 착 공 일 : 2013. 7. 9

마. 준공기한 : 2014. 6.30

바. 계약금액 : 금128,040,000원

사. 계약업체 : (주)참마루이엔티 대표 정달옥

아. 감독부서 : 강서수도사업소(시설관리과)

2. 예산과목

가. 급수공사 : 급수공사비, (급수공사), 급수공사비(신설공사비)

나. 급수공사 : 급수공사비, (급수공사), 급수공사비(개조공사비)

다. 누수복구 : 배급수비, (상수도관 누수복구), 수선교체비(기타교체비)

3. 심의위원회 개최

가. 일     시 : 2014. 6. 27(금) 11:00

나. 장     소 : 사업소 4층 회의실

다. 내     용 : 건설폐기물 처리용역 설계변경 타당성 검토

라. 심의위원

- 심 의 위원장 : 시설관리과장

- 심 의 위  원 : 급수운영과 시설6급 김용호, 시설6급 유명은

시설관리과 시설6급 최양주, 시설6급 김근용

- 간        사 : 시설7급 박학중

마. 심의결과 : ‘적 정’

4. 설계변경 내역

가. 물량 증감 내역                                                              (단위 : ㎥)

공 종		당 초	변 경	증․감
계		2,940	2,794	감) 146
폐아스콘	적치장,현장→처리장(30㎞) (DT 24톤)	872	761	감) 111
폐콘크리트	적치장,현장→처리장(30㎞) (DT 24톤)	1,553	1,039	감) 514
폐토사	적치장,현장→처리장(30㎞) DT 24톤	515	994	증) 479

나.설계변경 금액                                                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감
총 용 역 비	128,040,000	118,393,000	감) 9,467,000
공 급 가 액	116,400,000	107,630,000	감) 8,770,000
부 가 세	11,640,000	10,763,000	감) 877,000
계	128,040,000	118,393,000	감) 9,467,000

5. 행정사항

최종 설계변경 시행 및 계약의뢰(서울특별시 재무과)

붙  임  1. ’13년 건설폐기물 처리용역 설계변경계획 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 설계변경 심의결과서 1부.  끝.