문서번호	급수운영과-15216
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박종대		김광운	06/27 代김태형
협조

설계변경 보고서(3차, 최종)

<2013년마장동외7개동 상수도공사-장기계속단가계약>

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

동부수도사업소

(급수운영과)

설계 변경 보고서(3차, 최종)

(2013년마장동외7개동상수도공사(장기계속단가계약)

『2013년마장동외7개동상수도공사(장기계속단가계약)』시행 중 신규공종 및 시공물량 증, 감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(3차, 최종)을 시행코자 합니다.

1				공사현황

○ 공 사 명 : 2013년 마장동외7개동상수도공사(장기계속)

○ 공사규모 : D=13~300mm,L=1,119m

○ 공사기간 : 2013.04.11 ~ 2014.06.30

○ 도 급 자 : 우성이앤씨(주) 전성배

○ 도 급 비 : 당초 - 546,302,700원

변경 –351,383,800(감194,918,900원)

2				설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 신규공종 및 시공물량 증･감 발생

○ 신규공종(3개)

공 종	규 격	비 고
누수방지대 부설 및 접합공외 2	100mm	신규 공종

○ 시공물량 증･감 현황

- 토공, 부설공, 포장공, 부대공 :

포장절단외 274공종의 물량 증･감

- 사급자재비 :

새들분수전주철관용(슬립인)외 133품목 물량 증･감

3				공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감
도 급 비	546,302,700	351,383,800	▽194,918,900
공급가액	496,638,819	319,439,818	▽177,199,001
부가가치세	49,663,881	31,943,982	▽17,719,899

4				보고자 의견

○ 위와 같은 실정으로 설계변경 사항에 대하여 우리사업소 설계변경 심의위원회를 개최 타당성 여부 등을 검토 및 심의 후 그 결과에 의거 설계변경을 시행코자 합니다.

첨부 : 설계변경 내역서 1부.  끝.