문서번호	토목부-12338
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	06/27 노우성

- 남부순환로 개봉역앞 구조개선공사 -

림괄아파트 방음벽 설치요청에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 남부순환로 개봉역앞 구조개선공사 -

림괄아파트 방음벽 설치요청에 대한 검토보고

남부순환로 경계상에 접하고 있는 지역으로 차량 소음, 보도미설치 등으로 생활에 많은 불편이 있다는 민원이 개봉 림괄아파트 단지 주민들로부터 접수되어 이에 대한 검토보고 임.

□ 추진근거

○ 접수민원「[고충민원 전영석외 81명(‘14.3.25.)]

- 남부순환로 평타화작업전에는 도로면과 아파트와 높이차이가 있어 문제가 없었으나, 평탄화로 인하여 무단침입이 가능하고, 소음 및 분진 등으로 생활이 불편하여 투명방음벽 요청

□ 현 황

○ 림괄아파트는 본 공사전에는 남부순환로의 사면 하단부에 위치하여 아파트쪽으로의 접근이 어려운 상태이었음.(공사기간 동안 임시 철재 방음벽 설치 함)

○ 당초 설계에 방음벽 설치가 미반영 되어 있었음

※ 위치도 및 전경

○ 방음벽 규모

개 요 : 직립형 높이 3m, 연장 86m(재료 강화유리)

소요공사비 : 150,480천원

□ 감리단 검토

○ 방음벽 설치 검토

평면화 및 차량 통행속도 증가 등으로 소음이 기준치를 넘어 방음벽 설치가 필요하며

방음벽이 지하차도 U-Type 구간 주변의 타아파트는 설계에 반영되어 있으나 림괄아파트 구간만 미 반영된 상태임

○ 방음벽기초 검토

동 아파트단지 용지경계에 방음벽 기초를 설치하여야 하나 기존 수로(하수암거)가 매설되어 있어 이격거리(방음벽 기초 표준 단면 : B=1.0m)가 부족하여 기존 수로암거 상부에 설치가 불가피 한 13m구간은 부득이 기초형식 변경 필요(PC PILE기초 사용<8EA>)

기존 수로암거 상부에 방음벽 기초 설치에 따른 안전진단 필요

□ 감리단 조치의견

○ 북측도로변 경계부에 위치한 두산아파트와와 형평성을 고려하여 방음벽을 설치하는 것이 타당하다고 판단됨.

□ 조치의견

○ 동 공사(평탄화)로 인하여 발생된 민원해소를 위해서는 방음벽의 설치가 필요함.

○ 기존 수로암거 상부에 방음벽 기초가 위치하게 되므로 구조적으로 문제가 없는지  안전진단을 실시(소요예산 20,000천원)하여 조치하고자 함.

○ 우선 감리단에 안전진단을 실시토록 조치하고, 추후 진단결과에 따라 방음벽 설치방안 별도 보고

○ 방음벽 공사비는 2015년 예산에 반영하고자 함.

붙 임 : 1. 시공사 현황 보고 1부.

2. 감리단 검토 보고서 1부

3. 민원관련 서류 1부.  끝.