투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	수신자참조
(경유)
제목	'백두산호랑이 숲 조성공사' 실정보고 검토결과 회신

1. ‘백두산호랑이 숲 조성공사 실정보고 제출’건(미종조 제2014-0430-01호, 2014.4.30)과 관련입니다.

2. 귀사에서 우리대공원과 계약체결하여 시행중인 ‘백두산호랑이 숲 조성공사’와 관련 제출하신 실정보고건에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신하오니, 공사에 반영하고 조속한 시일내 설계변경소위원회 등 절차를 이행할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 검토의견

구 분	검 토 의 견	비 고
안전휀스	안전강화와 차폐를 위한 기초, 틈막음 및 도색처리	승 인
2층관람대	목재휀스 연장, 데크제 및 난간보강 등	승 인
방사장정비	배수로인상 및 조경석쌓기, 마사토 포설 및 잔디 등 식재	승 인
수목식재	다복솔, 전나무, 대나무, 조팝 등 식재 보완(일부 대공원내 수목 활용)	승 인
방사장경계벽	목재가림막 + 측백나무(안) 시행	승 인
인공암	지적된 완경사지 보수	승 인
관람창 가드	백호사 앞 설치	승 인
기 타	수조안쪽 도색, 수조바닥 고형물 방지턱 설치 도로녹지대 조경석쌓기, 방사장 출입문 철재환봉을 설치	승 인

※ 제출된 공사비변경은 개략금액이므로 설계변경시 실시공물량으로 정산.  끝.

	서울대공원장
수신자	미래종합조경(주) 대표 주정수 귀하,(주)신영그린시스 대표 심재홍 귀하
주무관	조진성		주무관	윤희숙		조경과장	05/06 이성주
협조자
시행	조경과-2501	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로(막계동) 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02)500-7511	/전송	02)500-7993	/	jsjo@seoul.go.kr	/	대시민공개