문서번호	생태공원과-1110
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태공원과장	공원부장
석승우	이해룡	05/08 이용태
협 조
	총무과장		최대봉
	기획예산과장		박기영

한강 이촌권역 자연성 회복 사업

소규모 환경영향평가용역 시행 계획

한강사업본부

(생태공원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■□	(	한강유역환경청 협의	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

한강 이촌권역 자연성 회복 사업

소규모 환경영향평가용역 시행 계획

｢한강 이촌권역 자연성 회복사업｣ 추진에 따른 소규모 환경영향평가 용역을 시행하여 사업구간 내 환경에 끼치는 악영향에 대한 저감방안 및 환경보전 대책을 수립하고 이에 따른 대안을 제시하고자 함.

추진근거

○  한강 이촌권역 자연성 회복사업 추진 계획

(생태공원과-111호, 2014. 1. 16)

○  환경영향평가법 제43조 (소규모 환경영향평가의 대상)

용역개요

○  용 역 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업 소규모 환경영향평가용역

○  위    치 : 이촌한강공원 (한강철교 북단 주변)

○  규    모 : 97,100㎡

○  용역기간 : 착수일로부터 150일

○  과업내용

- 사업의 개요 및 지역 개황

- 대상사업의 지역적 범위 및 대상 지역 주변 지역에 대한 토지이용 현황

- 입지의 타당성

- 환경 현황, 환경에 미치는 영향의 조사

- 예측·평가 및 환경보전방안 제시

- 종합평가 및 보고서 작성 등

○ 용 역 비 : 49,457천원

소요예산

○ 소요예산 : 49,457천원

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 녹지시설 유지관리, 시설비 (100-401-01)

추진일정

○ 2014.  5.        : 사업계획 수립, 기술용역타당성 심의

소규모 환경영향평가용역 발주

○ 2014.  6. ~ 10 : 소규모 환경영향평가용역 시행

○ 2014.  9. ~     : 소규모 환경영향평가 신청 및 협의

○ 2014. 10.        : 소규모 환경영향평가 협의 완료

첨부 : 1. 설계내역서 1부.

2. 과업지시서 1부.  끝.