문서번호	환경정책과-7761
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		에너지효율화팀장	환경정책과장
정대진		장만수	05/09 강필영
협조
	에너지정책팀장		박숙희

‘14년 공공기관 LED조명 보급사업

한강공원 및 북악터널 LED조명 설치계획

‘14. 5

기후환경본부

(환경정책과)

‘14년 공공기관 LED조명 보급사업

한강공원 및 북악터널 LED조명 설치계획

공공조명을 '14년까지 50%('18년 100%) LED로 교체하여 서울 광원 에너지

감축을 선도하고자 한강공원 및 북악터널을 고효율 LED조명으로 설치 하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 원전하나 줄이기 종합대책(시장방침 143호,'12.5.8)

○ 공공부문 LED조명 815천개 보급(50%), 민간부분 700만개(25%)    보급하여 에너지 10만 TOE절감

□ 서울광원 LED조명 활성화 계획(부시장방침 77호,'14.3.10)

○ 공공기관 2018년 100%이상 LED조명으로 교체

Ⅱ		추 진 계 획

□ 추진대상 : 한강공원 및 북악터널 조명

□ 추진내용

〈광나루 생태공원〉

○ 한강공원 조명등 개선

- 위  치 : 광나루 생태공원

(하남시계~안내센타간 자전거도로)

- 교  체 : LED 50W 170등

○ 북악터널 조명등 개선

※ LED터널 최초 조성

- 위  치 : 북악터널(성북구 정릉로)

(터널 상․하행 구간)

- 교  체 : 형광등 32W 1,260등

⇒ LED조명 22W 1,260등

※ 등기구는 재활용(램프만 교체)

〈북 악 터 널〉

□ 추진방법

○ 환경정책과 : LED조명 교체기준 마련 및 사업비 배정

	□ LED조명 교체 기준 □
‣ 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준 준수 ‣ 고효율에너지기자재 인증제품(또는 KS) 획득한 LED조명 제품 ‣ 구매방법은 조달구매 또는 공개입찰 통해 구매 ‣ 설치대상 변경 등 주요 사업내용 수정시 승인 ‣ LED제품 구매시 절전율이 높은 제품으로 선정 ‣ 사용 가능한 등기구․램프는 재 사용 ‣ 설치완료 후 하자 등 유지관리 계획 수립(추진)

○ 사업부서(한강사업본부,북부도로사업소) : LED 보급사업 추진 및 관리

□ 추진예산(배정액)

○ 사업예산 : 190,800천원

- 배정기관 : 한강사업본부 133,700천원, 북부도로사업소　57,100천원

○ 예산과목 : 공공기관 LED조명 보급사업, 시설비

□ 추진일정

○ 2014. 5월 : LED조명 설치예산 재 배정

※ 녹색에너지과로 사업예산 재배정 요청

○ 2014. 6월 : LED조명 설계 및 발주

○ 2014. 6월 ~9월 : LED조명 설치완료

Ⅲ		기 대 효 과

□ 전력절감 : 약 183Mwh/년(42 TOE)

○ 기존조명 대비 전력절감 40%이상 감축

구 분	기존조명	LED조명
전력사용량(Mwh/년)	437	254
절 감 효 과	- 전력절감 : 183Mwh/년(기존조명 ⇒ LED) □석유환산톤 : 42TOE/년 = 183Mw/년 x 0.23 □사용시간 : 터널등 24시간, 공원등 9시간 적용 - 절감액 : 24백만원(단, 130원/Kwh적용)

Ⅳ		행 정 사 항

○ 사업예산은 방침결재 후 e-호조 통해 배정 : ‘14. 5월중

○ LED조명 설치완료 보고서 제출 : ‘14. 9월限(사업부서⇒환경정책과)

끝.