다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	강남구 테헤란로 440 포스코센터 동관 8층 포스코에너지(주)
(경유)
제목	서북병원 연료전지 하자보수 이행의견 검토 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 건물용 수소연료전지 제작구매·설치(2010.12, 계약번호 20101239694),  포스코에너지㈜ 연료전지-1080(2012.12.07.)호 및 연료전지 발전시설 하자보수 요청(녹색에너지과-22900호, '12.12.24) 사항과 관련하여,

3. 귀 사에서 제출한 서북병원 연료전지 하자보수 이행관련 100kW 연료전지 국산화 일정이 서북병원 건물형 연료전지 운영에 따른 시의성이 없다고 판단되어

4. 연료전지 발전시설 구매 금액의 반환과 함께 고장 연료전지 시설의 철거 등 원상복구를 요청드리니 본 사안이 6월 30일 이전까지 완료될 수 있도록 2014. 5.30(금)까지 이행계획을 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이경택		신재생에너지팀장	임병욱		녹색에너지과장	05/21 권민
협조자
시행	녹색에너지과-9986	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 문학의집 11-1 (예장동)	/
전화	02-2115-7427	/전송	02-2115-7849	/	seoulmul@seoul.go.kr	/	대시민공개