문서번호	조경과-3002
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
조진성	윤희숙	이성주	정상택		05/29 안영노
협 조

「백두산호랑이숲 조성공사」 설계변경(제4회) 검토보고

2014. 5

서울대공원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 백두산호랑이숲 조성공사 -

설계변경(제4회) 검토보고

「백두산호랑이숲 조성공사」 추진과 관련 전문가 자문 및 실정보고 사항에 대하여 종합검토하고 아래와 같이 설계변경하고자 보고드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사

○ 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 5. 29 (장기계속공사)

○ 공사내용 : 호랑이방사장 확장, 내실보수, 기반시설 정비 등

○ 총공사비 : 2,446,640,330원 (도급액 2,377,213,000원, 관급비 69,427,330원)

※ 도급액 : 총2,377,213,000원 (1차분 856,198,330원, 2차분 1,521,014,670원)

○ 도급업체 : 미래종합조경(주) 주정수, ㈜신영그린시스 심재홍

Ⅱ		변경내용검토

1) 관련근거

○ 공사 자문결과에 대한 조치계획(안) 보고 : 조경과-1703(2014.3.31)

○ 공사 실정검토보고 : 조경과-2496(2014.5.5)

2) 주요변경사유

○ 외부전문가 자문과 내부 의견수렴을 통해 안전시설 등 보완

- 탈출방지 및 관람객 안전시설 설치, 서식지재현을 위한 수목식재, 관람환경개선 등

○ 현장 실시공물량 정산반영 및 관련부서 요구사항 반영

3) 주요 변경내용

< 조경분야 >

○ 수목식재 : 방사장 서식지 재현 및 경관향상을 위해 변경

- 공사비 절감과 활착율을 증대하기 위해 공원내 기존 수목 이식 및 지급수목 식재

(소나무(이식), 대나무, 남천, 자작, 전나무, 잔디, 명자나무, 회양목, 조릿대, 억새, 비비추)

- 현장여건에 따라 수목 식재물량 변동

(소나무(이대), 영산홍, 잔디, 자산홍, 산철쭉, 조팝, 서양측백 등)

○ 시설물 : 안전시설 보완 등 전문가 자문의견 반영

- 동물탈출 방지를 위해 안전시설 강화

(탈출방지 기초설치, 방사장 틈새 철판설치, 출입문 문살설치, 강판설치 등)

- 관람객 안전 및 관람시설 경관 향상

(휀스 등 시설물도장, 목재휀스 연장, 강화데크 설치, 관람대C 콘트리트면 도색)

- 소동물관 앞 관람로 포장 추가에 따른 물량변동(큰크리트블럭 포장, 경계석설치)

< 토목분야 >

- 현장여건에 따른 토공, 우배수공 등 실시공물량 설계반영 (감)정산

(흙깍기 및 운반, 우수관 및 우수맨홀, 오수관 및 오수맨홀, 가설휀스설치 등)

- 경관향상을 위해 맨홀뚜껑 변경(칼라보도 → 조화맨홀)

- 도로측 토사유실 방지를 위한 조경석쌓기 물량반영

- 방사장내 마사토포설(동물복지과 요구사항)

< 건축분야 > : 없음

< 설비분야 >

- 수조 오염물 투입 저감시설 설치(사각파이프 설치), 지하수 및 저수지물 사용을 위한 조치(상수도분기)

- 방사장내 호랑이물그릇 설치(동물복지과 요구사항)

< 기타사항 >

- 현장여건에 따른 실시공 물량 설계반영 정산

4) 변경물량 및 내역 : 별첨

5) 설계변경 금액 및 예산사용 방안

○ 변경금액

- 총 차 (제4회)

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		2,446,640,330	2,589,640,330	143,000,000
도급액	공급가액	2,161,102,727	2,291,102,727	130,000,000
	부가가치세	216,110,273	229,110,273	13,000,000
	계	2,377,213,000	2,520,213,000	143,000,000
관급자재비		69,427,330	69,427,330	0

- 2차분 (제3회)

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		1,575,937,380	1,718,937,380	143,000,000
도급액	공급가액	1,382,740,609	1,512,740,609	130,000,000
	부가가치세	138,274,061	151,274,061	13,000,000
	계	1,521,014,670	1,664,014,670	143,000,000
관급자재비		54,922,710	54,922,710	0

※ 1차분 : 변경없음

○ 소요예산(143백만원)은 ‘공원 안전시설 보수 및 정비’ 사업비 활용

- 관련근거 : 공사 자문결과에 대한 조치계획(안) 보고 (조경과-1703, ’14.3.31)

Ⅲ		보고자 의견

○ 위 보고한 바와 같이 본 공사에 대하여 설계변경 조치하고

○ 「호랑이숲 전시물 제작설치 공사」가 공기연장 되었는 바, 재개장 전 수목 및 시설물 관리 ‧ 보완을 위해 공기연장 조치(2014. 6. 20일까지) : 지체상금 미부과

붙임 : 변경설계서 및 관련 보고서 각 1부.  끝.