함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경 계약 의뢰(2012년 남부수도사업소 관내 수도계량기 교체공사)

우리사업소에서 시행중인 “2012년 남부수도사업소 관내 수도계량기 교체공사(장기계속단가계약)”에 대하여 변경계약을 의뢰하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건명 : 2012년 남부수도사업소 관내 수도계량기 교체공사(장기계속단가계약)

2. 계약업체 : ㈜평산포장건설 대표 신세환, (유)연세건설 대표 박만규

3. 계약기간 : 2012.06.01. ~ 2014.06.30

4. 예산과목

가. 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 민간이전, 민간위탁대행사업

나. 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비, 기타교체비

5. 변경내용

가. 계약금액

구		당 초	변 경	비 고
총 공 사 비		788,963,960	656,645,000
도급비	공급가액	716,264,008	596,950,000
	부가가치세	71,626,400	59,695,000
	교육훈련비	1,073,552	0
	계	788,963,960	656,645,000

나. 계약수량

계량기교체	공 종	당초 수량	변경 수량	비 고
	만기계량기 교체(역지변 포함)	35,791	32,885
	만기계량기 교체	3,973	11,033
	동파교체(역지변 제외)	6,000	2,102
	휴일/야간 교체(역지변 제외)	1,097	204
	디지털계량기(역지변 포함)-유선식	480	0
	디지털계량기(역지변 포함)-무선식	480	0
	디지털계량기(역지변 제외)-유선식	109	0
	디지털계량기(역지변 제외)-무선식	109	0
	폐전계량기 철거	4,000	1,892
	스치로폼 보온재 교체	2,000	0
	동파대기	200	436

6. 변경사유 : 계약 물량 증 · 감 발생

붙임 : 1. 내부방침서 사본 1부.

2. 변경설계내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김세묵		현장민원과장	전결 06/27 오흥석
협조자
시행	현장민원과-15923	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로10길 97(신대방2동,470-11)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2561	/전송	02-3146-4657	/		/	부분공개(7)