투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	왕십리뉴타운제2구역주택재개발정비사업조합
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 준공기한 연기요청 승인알림(왕십리2구역-신호)

1. 왕십리뉴2재조 제2014-064호(2014.06.16.)와 관련입니다.

2. 위 호의 교통안전시설물 원인자 부담공사 준공기한 연장요청을 승인 하오니「교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항」 및 당초 승인조건에 알맞게 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물 설치공사(왕십리2구역-신호)

나. 공사위치 : 성동구 왕십리뉴타운 제2구역주택재개발 신축현장주변

다. 공사기간 및 관련업체 현황 지연사유

구분	공사기간		설계	감리	시공	원인자	지연사유
	변경전	변경후
신호	2012.04.08~2014.04.15	2012.04.08~2014.07.15	㈜영호이앤씨	서울시 강북감리	미래월드안전(주)	왕십리뉴타운제2구역주택재개발정비 사업조합	온라인리포트 수령지연

. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	차준원		주무관	채희준		기전과장	06/30 최주용
협조자
시행	기전과-4543	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차 시장길 41(용답동) 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개