함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	올림픽대로 송수관(D1500) 통수관련 추진 일정 통보

1. 배수과-4191(’14.6.30.)호 및 고도정수반-2339(’14.6.18.)호와 관련입니다.

2.「올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사」와 관련하여 통수작업 관계자 회의결과 추진일정을 아래와 같이 알려드리니, 관련부서는 원활한 급수운영 및 통수 시 수질에 이상이 없도록 업무 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

❍ 추진 일정

1) 신설 송수관로(D1500㎜) 등 시설물 점검

- 일  시 : 2014.6.27(금) 14:00(동작대교 남단 시점부)

- 점검자 : 본부(배수과, 시설관리과, 고도정수반),

남부수도사업소(시설관리과)

- 점검내용 : 밸브실 구조물 및 밸브 등 정상 작동상태 확인

2) 담수 작업

- 일    시 : 2014.6.30(월) 10:30(동작대교 남단 시점부)

- 담당부서 : 본부(배수과, 고도정수반),

남부수도사업소(시설관리과, 수질팀)

3) 관세척 작업

- 일    시 : ’14.7.2(수) ~ 7.10(목)

- 담당부서 : 본부(배수과, 고도정수반),

남부수도사업소(시설관리과, 수질팀)

- 세척 계속 시행 후 정상수질이 나올 경우 세척 종료

4) 통수작업

- 담수 및 관세척 작업 완료이후 관계자 회의 후 결정.

붙임 : 「올림픽대로 이중화 부설공사 관련」 노량진 배수지 통수작업 추진 회의결과 보고 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설관리과장,고도정수반장,남부수도사업소장(현장민원과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	신근호		배수과장	박기범		급수부장	06/30 이상홍
협조자
시행	배수과-4221	(		)	접수		(		)
우	121-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1434	/전송	3146-1429	/	smile1010@seoul.go.kr	/	대시민공개