함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 (4차-최종)에 따른 재계약 의뢰 (2013년 잠원동외 10개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행하는 『2013년 잠원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(4차-최종)을 시행하고 계약의뢰를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 2013년 잠원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사  개요 : 당초 D=15~300mm, L=1,878m

변경 D=15~300mm, L=1,813m

다. 계약상대자 : 성심건설(주) 대표 김길열

라. 계약  기간 : 2013.06.24. ~ 2014.06.30

마. 변경  사유 : 공종별 계약물량 증감

바. 설계변경금액

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
총 부 기 금 액	649,969,800	505,476,000	감)144,493,800
공 급 가 액	590,881,637	459,523,637	감)131,358,000
부 가 가 치 세	59,088,163	45,952,363	감)13,138,800

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 지원사업성시설비

붙 임 : 1. 설계변경결과 및 심의결과 각 1부.

2. 설계변경 갑지 및 내역서 각 1부.

3. 제비율검증 및 합의서 각 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이영동		시설관리과장	전결 06/30 원의덕
협조자
시행	시설관리과-14056	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화	3146-4892	/전송	3146-4939	/	lyd323@seoul.go.kr	/	대시민공개