투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결(2회) - 2014년 한강공원 시설물 정비 및 구암공원 개선공사(연간단가)

1. 치수과-2475(2014.6.27.)호와 관련입니다.

2. 치수과에서 시행하는『2014년 한강공원 시설물 정비 및 구암공원 개선공사(연간단가)』건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체(대표자)	계약금액(원)	공사기간
2014년 한강공원 시설물 정비 및 구암공원 개선공사(연간단가)	현도종합건설㈜ (******)	***********	2014.4.9. ~ 2015.2.25.

나. 변경내역 : 계약금액 변경(증 778,093,420*), 준공기한 변동없음

구분	계 약 명	계약업체	계약금액(원)	공사기간
변경 전	2014년 한강공원 시설물 정비 및 구암공원 개선공사(연간단가)	현도종합건설㈜ (******)	***********	2014.4.9. ~ 2015.2.25.
변경 후	2014년 한강공원 시설물 정비 및 구암공원 개선공사(연간단가)	현도종합건설㈜ (******)	************* ***************	2014.4.9. ~ 2015.2.25.

다. 변경사유

1) 행정1부시장방침 제186호(’14.5.21) 및 예산담당관-6160호(’14.5.21)

· 긴급조치 안전예산 예비비 사용승인 통보

2) 수해대비 안전관리(복구) 시행 및 집행계획 보고(본부장 방침, ’14.5.23)

· 우기 전 긴급 보수 및 보강공사 시행

(한강제방긴급보수 및 영동대교 남단 보강토옹벽보강공사)

붙임 :  1. 계약변경 의뢰공문 1부.

2. 설계변경 시행보고서 및 사유서 각 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 관련 보고서 각 1부.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 06/30 서영관
협조자	주무관	방호익
시행	총무과-9632	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0722	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개