투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경시행(참나무시들음병)

1. 북서울꿈의숲관리사무소-4261(2014.06.30)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『북서울꿈의숲 산림지역 참나무시들음병 및 위해수목 정비공사』와 관련하여 일부 변경사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 북서울꿈의숲 산림지역 참나무시들음병 및 위해수목 정비공사

나. 공사기간 : 2014.06.11. ~ 2014.07.05.

다. 도 급 액 : 금14,327,000원

라. 도 급 자 : 주식회사 유일종합조경 대표 김옥경

마. 변경내용 : 붙임 실정검토결과보고 참조

바. 총공사비

구 분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		14,327,000	18,040,000	증) 3,713,000
도급비	공급가액	13,024,545	16,400,000	증) 3,375,455
	부가가치세	1,302,455	1,640,000	증) 337,545
	계	14,327,000	18,040,000	증) 3,713,000

사. 예산과목

- 남산의입체적개발을통한서울의대표공원화, 공원녹지관리수준향상,남산및산하공원운영, 북서울꿈의숲및서울창포원유지관리, 시설비

붙임 : 1. 실정검토결과보고 1부.

2. 변경설계서 1부. 끝.

주무관	황서현		관리팀장	代황서현		북서울꿈의숲관리사무소장	06/30 김상근
협조자	운영팀장	김기중		재무팀장	한선
시행	북서울꿈의숲관리사무소-4290	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 월계로 173(산28-6)	/
전화	02-2289-4013	/전송	02-2289-4040	/	spinosus@seoul.go.kr	/	대시민공개