투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	공사감독3처장
제목	실정보고사항 검토(4차)결과 회신(한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사)

1. 서울시시설관리공단 공사감독3처-5994호(2014.06.25.)와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독업무 시행중인 『한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사』에 대한 실정검토 요청사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 회신하오니 설계변경 및 공사감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 실정보고사항 검토결과

구분	현황 및 검토의견(공단)	검토 의견(우리사업소)	비 고
	▶ 상춘약수터에 설치하는 바닥데크를 발주처 요청대로 수지합성데크로 변경	▶ 승인
	▶자재 및 설치형태(면적 등)에 따른 구조적 적정성 기술검토 필요▷ 기술검토비용 설계반영	▶ 승인

끝.

- 공 사 명 : 한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사

- 공사기간 : 2013. 12. 26. ~ 2014.7. 21.

- 도 급 액 : 434,766,800원

- 도 급 자 : ㈜ 그룹21, 대표 이용훈.

붙임 : 관련서류 1부. 끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	김대수		주무관	진동엽		녹지관리과장	06/30 최병언
협조자
시행	녹지관리과-6417	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 2층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3783-5949	/		/	대시민공개