문서번호	주차계획과-8366
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주차시설팀장	주차계획과장
최나영	최흥순	06/30 안석진

감리용역 기성(3회)청구 승인 검토보고

(잠실역 환승주차장 변경공사 전면책임감리용역)

2014. 6. 30

주차계획과

감리용역 기성(3회)청구 승인 검토보고

(잠실역 환승주차장 변경공사 전면책임감리용역)

잠실역 환승주차장 변경공사의 전면책임감리용역 기성(3회)청구와 관련, 사업시행자 승인 요청에 따른 검토 보고임.

□ 관련근거 : 협약서 제4조 제1항(책임감리 기성 등 사업비 집행 승인)

※ CPC 토목2-품2013-154호(2013.12.24)로 시행자 승인 요청

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 잠실역 환승주차장 변경공사 전면책임감리용역

○ 공사내용 : 주차장 면적 8,809㎡, 변경면적 1,410㎡

- 주차장 진입로 연장 : 폭6.7m, 길이 92.6m

- 주차장 진출로 축소 : 폭4.5m, 길이 43.8m

- 기타 : 주차장 리모델링 등

○ 용역기간 : 2013.5.27.~2014. 6.30

○ 용역금액 : 424,358천원

○ 용 역 사 : ㈜삼보기술단 대표 이창윤

□ 기성 청구금액(3회)                                               (단위 : 원)

구분	계약금액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	누계 기성액	잔액
용역비	424,358,000	162,800,000	238,700,000	401,500,000	22,858,000

□ 기성 산출내역 검토결과

○ 감리기간(3회) 산정 : 적정

-  5.3개월 적용(2013.12.21~2014.5.31)

○ 투입인원 확인 및 기타 산출내역 : 적정(기성율 94.61%)

□ 조치계획

○ 제3회 기성청구내역 검토결과 적정하므로 사업시행자에게 승인 통보하고자 함.

붙임 : 기성청구 승인요청 관련공문 1부. 끝.