투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 망원초록길 조성공사 전면책임 감리용역

1. 기전설비2과-2795(2014.6.30.)호와 관련입니다.

2.『망원초록길 조성공사 전면책임 감리용역(장기계속)』건에 대하여 다음과 같이 계약금액을 변경하고자 합니다.

가. 계 약 명 : 망원초록길 조성공사 전면책임 감리용역

나. 계약업체 : ㈜수성엔지니어링 외 1

다. 변경내역                                              (단위 : 원)

구 분	계약기간	계약금액		비 고
		변경 전	변경 후
총 차	2010.1.20.~2014.7.31.	1,910,000,000	1,942,000,000	증 32,000,000
5차(금차)	2014.2.27.~2014.7.31.	196,000,000	228,000,000	증 32,000,000

라. 변경사유 : 상주감리원 근무일수 조정에 따른 설계변경

붙  임 : 변경계약 요청 의뢰서 1부.  끝.

주무관	박신영		총무과장	최대봉		총무부장	07/01 서영관
협조자
시행	총무과-9758	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	calla121@seoul.go.kr	/	대시민공개