문서번호	정수과-2023
보존기간	년
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김진수		서한호	07/01 김동기
협 조
	주무관			이성환
	주무관			김종수
	주무관			권오정

설계변경 심의결과 보고

(정수시설물 청소 및 준설)

뚝도아리수정수센터

정수과

설계변경 심의결과 보고

『정수시설물 청소 및 준설』에 대하여 물량 변경에 따른 설계변경 적정성을 심의하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

■ 사업 현황

- 계약  건명 : 2014년 정수시설물 청소 및 준설

- 계약상대자 : ㈜와이씨산업개발  대표 박 재 남

- 계약  기간 : 2014. 3. 19 ~ 2014. 12. 31

- 계약  금액 : 65,118,537원

■ 검토회의

일  시 : 2014. 6.  30  (11:00 )

안  건 : 정수시설물 청소의 물량변동 및 계약금액의 변동사항

검토자 : 설계변경 심사위원 - 정수과장외 3인

■ 설계변경 내용

공 종	규 격	단위	수 량		증감물량	예산증감	비 고 (변경사유)
			당 초	변 경
정수지 벽체물청소		㎡	15,303	15,303	-	-	-
정수지 벽체세제청소		㎡	11,520	11,520	-	-	-
침전지 벽체청소		㎡	55,472	48,918	감) 6,554	감)2,523,290	-
경사판청소		㎥	4,338	4,338	-	-	-
이토제거		㎥	2,068	2,068	-	-	-
토사절취		㎥	37	37	-	-	-
2지 회수조 준설	60톤	㎥	118	118	-	-	-
베니지 및 1지 회수조준설	30톤	㎥	266	266	-	-	-
상등수 이송펌프 설치 및 철거		개소	24	24	-	-	-
상등수 이송펌프 운전		개소	24	24	-	-	-
여과사 운반		㎥	10	65	증) 55	증) 498,355

공 종	규 격	단위	수 량		증감물량	예산증감	비 고 (변경사유)
			당 초	변 경
여고사 여과지내 투입	샌드 펌프	㎥	10	-	감) 10	감) 20,690
펌프 설치 및 해체		개소	1	-	감) 1	감) 219,759
여과사 투입 고르기		㎥	10	65	증) 55	증)2,270,180
계						증) 4,796

■도급비변경사항

당초	변경	증감	사유
65,118,537원	65,118,537원	-	물량변동

■ 설계변경 심의결과

물량 변동 및 계약금액의 변동에 대하여 설계변경 적정 반영되었음

■ 조치의견

설계변경 심의결과 타당하므로, 이에 따라 설계변경 시행코자 합니다.

붙임 : 1) 설계변경 검토회의 개최공문 1부

2) 설계변경 검토 심의서 1부

3) 변경내역서 1부.  끝 .

2014. 6. 30

위 검토자  : 위원장 정수과장           서 한 호 (인)

위원 시설6급            이 성 환 (인)                                              위원 환경7급            권 오 정 (인)

위원 시설7급            김 종 수 (인)