투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	하수슬러지 건조시설 설치공사 정산계약 시행

1. 공사감독3처-6129, 6141(2014.6.30)호 관련입니다.

2. 위호로 우리센터에서 시행중인“하수슬러지 건조시설 설치공사”(계약번호 20130646166 – 00(2013.6.27.)에 대한 정산 설계서가 제출되어 아래와 같이 변경계약 코자 합니다.

가. 공 사 명 : 하수슬러지 건조시설 설치공사

나. 계약기간 : 2013.07.03.～ 2014.07.02.

다. 계 약 자 : (주)대저건설  대표 조건연

라. 변경내역 : 붙임 설계변경(정산) 내역서 참조

구 분	정산 금액	변경 전	증	비고
금액증감	금4,558,400,000원	금4,482,643,000원	금75,757,000원

마. 설계변경사유 : 운영편의를 위한 추가공량 발생 및 물량 증감 등 반영

바. 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 오니처리유지보수, 시설비.

붙임	1. 보고서 1부.

2. 설계변경 사유서 1 부.

3. 설계변경 내역서 1 부.

4. 합의각서 1 부.  끝 (품의: 444)

주무관	유승춘		주무관	홍지윤		슬러지재활용과장	김황래		난지물재생센터소장	07/01 정흥순
협조자
시행	슬러지재활용과-861	(		)	접수		(		)
우	412-190	고양시 덕양구 대덕로 426(현천동) 슬러지재활용과	/
전화	02-300-8541	/전송	02-300-8544	/	choon@seoul.go.kr	/	대시민공개