문서번호	정수시설과-1552
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	정수시설과장	소장
최윤수	남효돈	07/01 유성종

설계변경 심의 결과보고

(2정수장 침전지 슬러지배관 교체공사)

2014. 7.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의 결과보고

(2정수장 침전지 슬러지배관 교체공사)

“2정수장 침전지 슬러지배관 교체공사” 시행 중 시공 물량 증․감 사항에  대하여 설계변경 심의를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 계약방법 개선지침(경리 13330-2047, 2003.8.14)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2정수장 침전지 슬러지배관 교체공사

○ 공사규모 : 2정수장 침전지 슬러지배관 및 밸브 교체 : 1~4지

○ 계약금액 : 67,269,000원

○ 공사기간 : 2014. 3. 26. ~ 9. 21.

○ 계 약 자 : ㈜초록이노텍  대표 양기준

□ 설계변경 내용 및 사유

○ 시공물량 및 단가 증감 내역

공 종	규 격	단 위	물량 및 단가 내 역		증 ․ 감
			당초	변경
플랜지체결용 B/N(400A)	400A용(STS)	개	24	384	증 360
STS플랜지(200A)	(당초)200A,5K (변경)200A, ANSI 150LB	원	50,942	61,000	증 10,058
STS플랜지(400A)	(당초)400A,5K (변경)400A, ANSI 150LB	원	189,552	202,600	증 13,048

○ 플랜지체결용 B/N(400A) 수량이 상이하여 변경 시행

○ STS플랜지(200A,400A) 규격이 상이하여 단가 변경시행

○ 건강, 연금, 노인장기요양 보험료 사후정산(납입확인서 미제출)

․ 국민건강 보험료 : 466,883원 감액

․ 국민연금 보험료 : 683,846원 감액

․ 노인장기 요양보험료 : 30,580원 감액

○ 설계변경 내역

공 종	도 급 액		증 ․ 감	주요변경사유
	당 초	변 경
도 급 액	67,269,000	69,168,000	(증)1,899,000
플랜지체결용 B/N(400A)	147,408	2,358,528	(증)2,211,120	시공물량 정산
STS플랜지(200A)	1,222,608	1,464,000	(증) 241,392	시공단가 정산
STS플랜지(400A)	1,516,416	1,620,800	(증) 104,384	시공단가 정산
건강,연금, 노인 장기요양보험료	1,181,308	0	(감)1,181,308	납입내역 사후정산
부대공사 및 제잡비	63,201,259	63,724,672	(증)523,413	시공물량 정산

□ 심의결과

○ 설계변경의 타당성 : 타당함

○ 계약변동(증․감)물량 계약단가 적정 적용여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 조치의견

○ 심의 결과에 의거 설계변경 시행코자 합니다.

붙임 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 심의의견서 1부.   끝.