다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수 주간보고(15주)

2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수사업과 관련하여 15주차 주간업무 처리 현황을 아래와 같이 보고드립니다.

아   래 -

○ 추진기간 : 2014. 6. 23 ~ 2014. 6. 27.

○ 추진사항

- 추가 및 보완개발 사항

구분	금주실적 (14.6.23~6.27)		차주계획 (14.6.30~7.4)		누적 (14.3.13~6.27)
	진행	완료	진행	완료	전체	완료	진행	지연	잔여	완료율	진행율	지연율
추가개발	0	8	3	5	24	4	8	5	12	16.7	50	62.5
보완개발	2	6	1	7	34	12	6	3	16	35.3	52.9	50
합계	2	14	4	12	58	16	14	8	28	27.6	51.7	57.1

- 운영 및 유지보수 사항

구분	전주 (14.6.23~6.27)			금주 (14.6.30~7.4)			누적 (14.3.13~6.27)
	접수	진행	완료	접수	진행	완료	미완료	완료	전체
부과	26	13	24	20	12	20	12	220	232
징수	16	7	13	17	9	15	9	160	169
공통기타	7	6	10	13	6	14	6	86	92

- 지방소득세 부과·징수프로그램 개발사항

구분	분석		설계		개발		테스트		전체
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
양도소득	100	99	100	91	24	20	-	-	44.8	42.0
종합소득	100	99	46	40	-	-	-	-	29.2	27.8
특별징수	100	99	100	91	12	9	-	-	42.4	39.8
법인소득	100	99	46	40	-	-	-	-	29.2	27.8
전체	100	99	73.0	65.5	9.0	7.3	-	-	36.4	34.4

붙임 : 1. 주간업무 현황보고(15주차). 1부.

2. 추진현황표. 1부.  끝.

주무관	김의중		세무정보화팀장	김천억		세무과장	07/01 김근수
협조자
시행	세무과-14483	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3408	/전송	02-2133-1034	/	wj4382@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다