투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	고양시장(공사과장)
(경유)
제목	지장 건축물 철거 촉구

1. 토목부-20185(2013.10.31.)호 및 토목부-617(2014.01.13.)호와 관련입니다.

2. 위 호로『신사사거리~고양시계간 도로개설공사』에 편입된 귀 시 구간내에 위치한 지장건축물(6동) 보상 및 철거를 요청하였으나 현재까지 건물(공장)내에서 작업을 하고 있어 공사 추진 막대한 지장을 초래하고 있습니다.

3. 본 구간은 성토구간으로 현장내에서 발생되는 토사를 성토하여야 하나  지장 건축물 철거가 지연됨에 따라 현장내에 적치하여야 할 토사를 외부로 반출하고 있어 추가 비용이 발생되고 있으니 조속 보상 및 철거하여 주시기 바라며,

4. 위 건축물에 대한 보상 및 철거 등 조치계획을 2014. 7. 7.(월) 한 통보하여 주시기 바랍니다.

5. 아울러 우리시와 귀 시간 맺은 협약사항과 달리 보상 및 지장물(건물 등) 철거 지연으로 공사가 원활히 추진되지 못하고 있으니 귀 시에서 잔여 구간의 공사를 직접 시행하는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 현황사진 1부.

2. 철거대상 건물 사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이상근		교량건설과장	이동훈		토목부장	07/01 노우성
협조자
시행	토목부-12553	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2578	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	대시민공개