투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「서울대공원 백두산호랑이숲 조성사업 전기시설 개선공사」준공기한 연기의뢰

1. 시설과-3051(2014.5.28)호와 관련입니다.

2.『서울대공원 백두산호랑이숲 조성사업 전기시설 개선공사』와 관련하여 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 공 사 명 : 서울대공원 백두산호랑이숲 조성사업 전기시설 개선공사

나. 계 약 자 : ㈜제이케이넷 대표 이 중 구

다. 계약금액 : 일금일억일백일십오만육천칠백구십원정(\101,156,790원)

라. 변경내용

구 분	변 경 내 용		비 고
	당 초	변 경
공사기간	‘13.05.06~‘14.5.30	‘13.05.06~‘14.6.30

마. 연기사유

-  본 공사는 전책, 공원등 및 케이블 개량 등을 시행하는 공사로 현재 호랑이 방사가 이뤄지지 않아 전책 기능과 지지 상태 등을 확인할 수 없는 바, 방사 이후 전책 등의 기능을 확인코자 준공기한을 연기코자 함

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 백두산호랑이숲 조성,  시설비(100-401-01)

첨부 : 방침서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	정삼모		주무관	이춘한		시설과장	05/28 공헌구
협조자
시행	시설과-3061	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개