문서번호	총무과-9854
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
우명근		최대봉	07/02 서영관
협조	주무관		황호익
	주무관		장보금

한강 여름 캠핑장 통신공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
운영과-4794 (2014.06.17.)				21,835천원

2014. 7.

한강사업본부

총 무 부

한강 여름 캠핑장 통신공사 계획

한강 여름 캠핑장의 운영본부에서 사용하는 전화 및 인터넷용 통신선로를 확보하여 원할한 캠핑장운영이 될 수 있도록 공사를 시행코자 함.

※ 운영과-4794(2014.6.17.)『2014년 여름 캠핑장 조성․운영 기본계획』

Ⅰ		캠핑장 현황

○ 운 영 기 간 : '14. 7.19(토) ~ 8.19(화) <32일>

○ 장소 및 규모 : 4개공원 500동

공원명	위 치	면 적	동 수
뚝 섬	청담대교 상류 잔디밭	18,800㎡	100동
잠 실	잠실대교 하류 잔디밭	8,620㎡	100동
잠 원	한남대교 하류 잔디밭	8,280㎡	100동
여의도	마포대교 하류 너른들판	29,300㎡	200동

Ⅱ		공사 발주 계획

○ 공 사 명 : 한강 여름 캠핑장 통신공사

○ 위    치 : 캠핑장 4개소(뚝섬, 잠실, 잠원, 여의도)

⁃ 뚝섬캠핑장은 2013년 사용선로 재활용

○ 공사개요

⁃ 전선관 배선  PVC 36∅×760m,

⁃ 광케이블 포설 SM4C  760m

○ 공사기간 : 계약일로부터~2014. 7. 18.까지

○ 공 사 비 : 금21,835,000원(부가가치세 포함)

○ 계약방법 : 수의계약

⁃ 정보통신공사업 면허 등록을 필하고 한강구역 KT협력업체로 시공 및 정비가 가능하며 저가의 견적을 제출한 ㈜대진통신과 수의계약

○ 계약근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률시행령 제25조 제1항 제5호

○ 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 시민중심의공원관리 및 한강문화 활성화, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 보수 정비, 시설비

Ⅳ		향후계획

○ 공사발주  : ‘14. 7. 2.

○ 공사착공  : ‘14. 7. 4.

○ 공사완료  : ‘14. 7. 18.

붙임 : 1) 견적서 2부.

2) 도면 1부.   끝.