문서번호	정수시설과-1402
결재일자	2014.7.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤양호		07/02 윤종민
협 조
	주무관			최양교
	주무관			곽희영
	주무관			정인영
	주무관			이상록

『LED조명 교체공사』

설계변경 심의 결과보고

2014. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

『LED조명 교체공사』

설계변경 심의 결과보고

우리센터에서 시행중인『LED조명 교체공사』설계변경에 대해 심의하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 뚝도아리수정수센터 LED조명 교체 전기공사

□ 공사개요 : 관리본관, 웰빙센터, 배출수처리장, 송수실 및

공동구 조명 634등 LED로 교체

□ 공사기간 : 2014.5.16. ~ 7.4.

□ 계약금액(도급공사비) : 37,700,550원

(총공사비: 114,886,050원, 관급자재비(LED조명): 77,185,500원)

□ 도급자 : 상무텔레콤(주)

Ⅱ		검토회의

□ 일 시 : 2014. 7. 1(화) 16:00~16:40

□ 안 건

○ 공종별 물량변경에 따른 설계변경 적정여부

○ 보험료 정산 등에 따른 적정 적용여부 등

□ 검토자 : 설계변경 심사위원

○ 심사위원장 : 정수시설과장

○ 심사위원   : 최양교팀장, 곽희영팀장, 정인영주무관, 이상록 주무관

Ⅲ		설계변경 내용

□ 현장여건 반영

- 배출수처리장 대기실 : 천정 구조에 부합한 조명타입으로 변경(2개)

․40W 평판형 300*1200 → 레이스웨이형 1012*80*72

- 관리본관 지하 한마음관 : 천정 등기구(담파형) 재활용, 형광램프 및

안정기만 LED로 교체(2등용 15개)

- 2계열 공동구 퇴수밸브 관랑실 조명 신설에 따른 배선 설치(100m)

□ 보험료 정산

- 건강,연금,노인장기요양보험료 증빙자료 미제출에 따른 감액

□ 공사비 변경사항

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
총공사비	114,886,050	113,626,030	감 1,260,020
도급공사비	37,700,550	36,611,410	감 1,089,140
관급자재비 (조달3자단가)	77,185,500	77,014,620	감 170,880

Ⅳ		설계변경 심의결과

□ 현장여건에 따른 공종별 물량변경 및 제경비 정산 등에 따른

설계변경이 적정하게 반영되었음.

Ⅴ		조치 의견

□ 설계변경 심의결과 타당하므로 이에 따라 설계변경 시행코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부

2. 설계변경 검토의뢰서 1부

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.