문서번호	설비부-7091
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		이달영	07/02 박기형
협조

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

2014년 직접구매 자재 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

도시기반시설본부

(설비부)

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

14년 직접구매 대상 자재 구매계획 보고

우리본부에서 시행중인 『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』에 소요되는

설비분야 중소기업 직접구매 대상 자재에 대한 ‘14년 구매계획 검토 보고임.

Ⅰ				공사개요

◦ 공 사 명 : 『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

◦ 공사개요

► 분뇨 처리시설 4,000㎥/일 신설

► 기존 처리시설 2,000㎥/일 철거 및 상부 공원화

◦ 사 업 비 : 73,200백만원(공사비 63,470백만원)

◦ 공사기간 및 공사비                                   (단위 : 원)

구 분	총 차	1 차	2 차	비 고
공사금액	63,470,000,000	4,022,799,000	19,069,340,000
공사기간	‘12.11.15~’15.02.02	‘12.11.15~’13.04.30	‘13.4.19~’15.02.02

◦ 시 공 사 : 대림산업(주) / 감리사 ㈜도화엔지니어링

Ⅱ				예산현황

◦ 2014년 예산현황                                  (단위 : 백만원)

예산현액	‘13이월	2014년				비 고
		소계	시설비	감리비	부대비
32,784	10,664	22,120	21,230	870	20

◦ 2014년 시설비 사용(계획) 현황                   (단위 : 백만원)

계	공사비	폐기물용역	관급자재비	비 고
21,230	13,782	21	7,427	토목공사 7,752 기계약(14.02.05)

※ 관급 : 기계 3,953 / 전기 2,190 / 토목 1,284

Ⅲ				관급자재 구매계획

◦ 14년 기계설비 관급자재 구매현황                  (단위 : 백만원)

‘14예산	기구매	금회구매	추후구매	비 고
3,953	2,028	349	1,576	구조물 공정에 따라 순차구매

※ 기구매(‘14.5.21) : 협잡물종합처리기 외 3종

◦ 금회구매

- 공사용 직접구매 자재(크레인 및 호이스트) 구매요청

[서분감 제2014-400(2014.6.30)]

◦ 크레인 및 호이스트 구매내용

연번	품 명	규격	수량	금액	비 고
1	M-118 장비반입용 크레인	서스펜션 크레인 '10TON× Span6.0m×주행 9m×인양 16m	1대	44,379,000	설치포함
2	M-119 전처리실 호이스트	전동모노레일호이스트 '3TON×주행42m×인양9m	1대	32,062,000	〃
3	M-308 농축기실 호이스트	전동모노레일호이스트(굽힘1개소) '3TON×주행39m×인양9m	1대	30,791,000	〃
4	M-309 유지관리 및 장비반입용 호이스트	전동모노레일호이스트(굽힘3개소) '3TON×주행64m×인양16m	1대	43,499,000	〃
5	M-404 송풍기실 호이스트	전동모노레일호이스트 '3TON×주행14m×인양9m	1대	19,843,000	〃
6	M-405 송풍설비 유지 관리용 호이스트	전동모노레일호이스트(굽힘1개소) '3TON×주행24m×인양9m	1대	24,340,000	〃
7	M-509 공동구 유지관리용 호이스트	전동모노레일호이스트 '2TON×주행56m×인양9m	1대	37,634,000	〃
8	M-708 탈취기실 호이스트	전동모노레일호이스트(굽힘5개소) '2TON×주행103m×인양9m	1대	58,748,000	〃
9	M-805 오폐수처리설비 유지관리용 호이스트	전동모노레일호이스트 '2TON×주행24m×인양9m	1대	23,753,000	〃
합 계		부가가치세 별도		315,049,000

◦ 구매방법 : 조달구매(총액계약 - 대한민국특수임무유공자회)

Ⅵ				향후계획

◦ 2014. 07 : 관급자재 발주

◦ 2015. 05 : 장비 반입 설치

◦ 2015. 11 : 공사준공.