문서번호	운영과-5314
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장		한강사업본부장
황호익	나원호	조원준		07/02 한국영
협 조

2014 한강 여름 캠핑장

경계휀스 및 데크 설치계획

2014. 7

한강사업본부

(운 영 부)

:: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2014 한강 여름 캠핑장 운영관련

경계펜스 및 데크 제작 설치 계획

2014 한강 여름캠핑장 운영과 관련하여 이용자들의 편리하고 안전한 캠핑장 이용을 위하여 경계펜스(울타리) 및 데크를 제작․설치하고자 함

1			캠핑장 운영 규모

□ 규모 : 4개공원 500개동

공원명	위 치	면 적	동 수
뚝 섬	청담대교 상류 잔디밭	18,800㎡	100동
잠 실	잠실대교 하류 잔디밭	8,620㎡	100동
잠 원	한남대교 하류 잔디밭	8,280㎡	100동
여의도	마포대교 하류 너른들판	29,300㎡	200동

※ 붙임 한강 여름캠핑장 배치도  참조

2			경계펜스(울타리) 및 데크 설치

□ 추진근거 : 2014년 한강 여름캠핑장 조성운영 기본계획

(운영과-4764, 2014.6.17)호

□ 경계펜스

❍ 설치목적 : 캠핑장 이용자들의 편의 및 안전도모

❍ 설치제품 : 접이식 임시설치 펜스(엔지니어링 플라스틱 재질)

- 실용신안등록 제20********호

※ 붙임 설치 예시 사진 참조

❍ 설치방법 : 경계펜스 제작 구매에 설치․조립 포함

❍ 설치규모 : 총길이  2,600m

- 설치수량 : 2,600개(1m ×1m 규격)

□ 데크 제작․설치

❍ 설치목적 : 텐트 하부 잔디보호 및 우기 시 습기예방

❍ 설치제품 : 데크(소나무합판) 및 받침대(미송)

❍ 설치방법 : 텐트종류별(5종) 맞춤 제작 설치

❍ 설치규모 : 데크 총 520개 및 받침대

- 데크(3M*3M) = 370개(지오돔, 캐노피돔)

․ 받침대(8.5cm*2.4cm*3m) → 10개*370개

- 데크(3.3M*2.8M) = 40개(핵사곤 - 6각형텐트)

․ 받침대(8.5cm*2.4cm*3.3m) → 12개*40개

- 데크(2.8M*2.4M) = 110개(에코피아, 롬돔)

․ 받침대(8.5cm*2.4cm*2.8m) → 8개*110개

3			특정제품 선정심사위원회 개최

□ 안  건 : 2014 한강 여름 캠핑장 특정제품(경계펜스)선정

□ 위원구성

❍ 위원장 : 운영부장

❍ 위  원 : 총무과장, 환경과장,  공원기획과장,  녹지관리과장

❍ 간  사 : 운영과장

□ 일시 : 2014. 7. 3(목) 10:00

4			발주계획

□ 경계펜스

❍ 계약방법 : 수의계약

- 긴급한 행사로서 입찰에 부칠 여유가 없을 경우

․『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제25조 1항  및 제1호

- 실용신안등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한

대용품이나 대체품이 없는 경우

․『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제25조 1항 4호 사목

❍ 계약대상 : 신성기업(대표 류호진)

❍ 계약기간 : 착수 후 14일 이내

❍ 하자담보 : 납품일로로부터 2년간

❍ 소요예산 : 금78,981,760원(금칠천팔백구십팔만일천칠백육십원)

- 서울시 본청 계약심사과 계약심사 예정

❍ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영/ 한강공원 시설물 관리 및 개선/

한강공원 이용시설 보수․정비/ 시설비

□ 데크 제작 설치

❍ 계약방법 : 수의계약(3개 업체에 20백만원 범위 내)

- 텐트 종별 맞춤제작이 필요하여 단기간 생산이 어려움

- 4개 캠핑장에 일시에 설치해야 하므로 업체 분산을 통하여 효율적인 설치 도모

❍ 계약대상 : ㈜첨단종합물류(대표 전성호)외 2개 업체

❍ 계약기간 : 착수 후 7일 이내

❍ 하자담보 : 납품일로로부터 1년간

❍ 소요예산 : 금55,000,000원(금오천오백만원)

❍ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영/ 한강공원 시설물 관리 및 개선/

한강공원 이용시설 보수․정비/ 시설비

5				추진일정

2014. 7. 2               기본계획 수립

2014. 7. 3               특정제품선정심사위원회 개최

2014. 7. 3 ~ 7. 7      계약심사 의뢰 및 심사완료

2014. 7. 8 ~ 7. 10     계약체결 및 제작구매 시행

2014. 7. 13              데크 설치 완료

2014. 7. 15              펜스 설치 완료

붙임 : 1. 캠핑장 조성․운영 기본계획 및 캠핑장 배치도 각 1부

2. 경계펜스 설치예시 및 실용신안등록증 각 1부