문서번호	설비부-7087
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
변인수		조예환	07/02 박기형
협조

감리용역(총차, 2차) 설계 변경 보고

(송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사)

2014.  7.

도시기반시설본부

(설  비  부)

감리용역(총차, 2차) 설계 변경 보고

(송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사)

송정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 관련, 선행공종(토목, 건축) 공기연장에 따른 감리원 투입조정을 위한 감리용역 설계변경 검토 보고임.

용역개요

□ 용 역 명 : 송정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사(전기, 소방) 감리용역

□ 용역개요

- 송정 : 변압기 10,000KVA, 펌프 900HP × 2대 증설

- 사근 : 변압기 12,500KVA, 펌프 1,600HP × 2대 증설

□ 용역금액 : 총차 207,006,277원(2차 94,006,277원)

□ 용역기간 : 총차 2013.06.01 ~ 2014.08.20(2차 2014.02.21 ~ 2014.08.20)

□ 용역업체 : ㈜동화이엔씨

설계변경 사유

□ ‘13년 수방기간(‘13.5.15∼10.15) 이후 송정펌프장 기존건물 철거 및 사근펌프장 지하수 용출에 따른 공사중단(약 3개월) 등 절대공기 부족으로 공사기간이 연장됨에 따른 감리기간 연장 필요.

□ 설계변경 내역

- 감리용역 기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	2013.06.01.~2014.08.20	2013.06.01.~2014.12.12
2 차	2014.02.21.~2014.08.20	2014.02.21.~2014.12.12

- 감리용역비 조정내용                                       (단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	207,006,277	227,744,000	증)20,737,723
2 차	94,006,277	114,744,000	증)20,737,723

조치의견

□ 선행공정 지연으로 연장된 공사기간에 맞추어 감리기간 연장이 필요함에 따라 감리용역(전기, 소방)을 설계변경 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.