문서번호	급수운영과-13439
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		최임봉	07/02 김광식
협조	주무관		공문수
	주무관		김도묵

삼성ㆍ봉은배수지 통수 관련 추진사항 보고

2014. 7.

강남수도사업소

(급수운영과)

삼성∙봉은배수지 통수관련 추진사항 보고

「삼성∙봉은배수지」통수 계획과 관련 그동안 진행한 배수지 급수구역 조정 및 수계전환 등 추진사항을 보고 드림.

☞ 본부 배수과-4203(’14.6.30)호, 급수운영과-12382(’14.6.19)호와 관련임.

Ⅰ		삼성∙봉은배수지 급수계획

❍ 시설용량(4.2만톤)┌ 삼성(3.0만톤, H.W.L 67.0m, 표고 35m 미만 지역)

└ 봉은(1.2만톤, H.W.L 40.0m, 표고 35m 이상 지역)

❍ 급수지역 : 강남구 삼성1동 등 14개동 96천세대(12.6만㎥/일)

- 삼성배수지 : 삼성1동 외 9개동 56천세대(7.4만㎥/일)

- 봉은배수지 : 논현2동 외 3개동 40천세대(5.2만㎥/일)

※ 삼성가압장 : 400HP×4대(정속2대, 변속2대)

Ⅱ		그간 추진사항

❍ 봉은배수지 급수구역 공급을 위한 연결공사 : 3.28 ~ 4.10일(완료)

- 광암수계 공급에서 암사수계 공급으로 변경(배수과-1222, ‘14.2.26)

- 암사직송 D1500㎜와  가압유출 D1000㎜에 D900㎜ 연결(L=20m)

❍ 수계분리를 위한 경계밸브 신설 : 4.11 ~ 4. 30일(완료)

- 봉은배수지 수계와 삼성배수지 수계간 경계밸브(D1000㎜) 1개소 강남구청역 사거리에 설치

□ 반포배수지에서 삼성배수지로의 수계전환 시행 : 6.24~7.1일(완료)

- 강남대로 우측 논현동, 역삼동일대 지역 제수변 D500~800㎜ 6개소를 반포배수지수계에서 삼성배수지수계로 전환

- 본부 배수과와 합동으로 밸브 조절 및 퇴수 시행 완료

※ 6.25일 수계전환 과정에서 유속변화 등으로 인한 신사동, 역삼동, 논현동일대 적수 일부 출수, 피해배상요구 등 민원사항은 미발생 하였음.

□ 삼성․봉은배수지 블록고립 : 5.26 ~ 7.3일(진행중)

- 소블록(14개 블록) : 완료(9개 블록), 미고립(5개 블록)

Ⅲ		향후계획

□ 단계별 수계전환(본부 통수계획에 의거)

① 삼성․봉은배수지 급수구역 고립 : 7.3 ~ 7.15

- 소블록 5개 블록(역삼동 지역) 블록고립 시행

② 삼성배수지 단계별 통수 : 하절기 이후(‘14. 9월)

③ 봉은배수지 통수(암사 송수 ⇒ 가압펌프)

- 통수 일정은 ①, ② 번 수계전환 완료 이후 관계자 회의 통해 결정

④ 봉은배수지 통수후 기존 증압장 점차적 폐쇄(7개소)

- 기존 증압장 7개소 : 논현1,2,3, 역삼1,2,3, 삼성증압장.  끝.